Распоряжение Администрации Томской области от 14.03.2024 N 169-ра
(ред. от 29.07.2024)
"Об утверждении паспортов ведомственных проектов "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения", "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ", "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО)", "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 15.10.2024

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 марта 2024 г. N 169-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕТИ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ", "МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО)
ИСТОЧНИКОВ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ ПЕРЕВОДА
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО)", "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПОСТАВОК
СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД"

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)		

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации" утвердить:
1) паспорт ведомственного проекта "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;
2) паспорт ведомственного проекта "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;
3) паспорт ведомственного проекта "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО)" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;
4) паспорт ведомственного проекта "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию.
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)

Губернатор
Томской области
В.В.МАЗУР

Приложение N 1

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ"
_________________________________________________
(наименование)

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	Протяженность внутрипоселковых газопроводов (далее - Протяженность ВПГ)	ВП	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	км	24,7	2023	3,3	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Отсутствует	
(п. 1 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	

План достижения показателей ведомственного проекта
в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Задача 1. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области	
1.1.	Протяженность внутрипоселковых газопроводов (далее - Протяженность ВПГ)	ВП	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,3	3,3	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	Мероприятие "Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск", (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск"	Протяженность ВПГ	км	-	-	3,3	-	-	-	-	Строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 3,3 км	Строительство объектов капитального строительства		
		Техническая готовность объекта	%	40	2023	100	-	-	-	-		Оказание услуг, выполнение работ		

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год	
Ведомственный проект "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения" (всего), в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	49245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		44320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		4924,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск", (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск" (всего), в том числе:		49245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		44320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		4924,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N
п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.		
1.	Мероприятие "Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск", (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44320,5	

План реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет				
1.	Задача 1. Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области	
1.1.	Мероприятие 1. "Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития "Северск", (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск"	01.01.2024	28.12.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области	км	3,3	49245,0	0,0	Акт выполненных работ	Нет	Отсутствует	
(п. 1.1 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	
1.1К.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.06.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Строительно-монтажные работы	-	Отсутствует	
(п. "1.1К.1" в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024
N 546-ра)	
1.1К.2	Контрольная точка "Подготовка исполнительной документации для сдачи объекта"		30.09.2024		-	-	-	-	Иной документ (информационная справка)	-	Отсутствует	
1.1К.3	Контрольная точка "Подписан Акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения"		31.10.2024		-	-	-	-	Иной документ (информационная справка)	-	Отсутствует	
1.1К.4	Контрольная точка "Проведение пусконаладочных работ на объекте"	-	28.12.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Акт приемки законченного строительства	-	Отсутствует	
(п. "1.1К.4" в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024
N 546-ра)	

Приложение N 2

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО) ИСТОЧНИКОВ
ВЫРАБОТКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЕТОМ ИХ ПЕРЕВОДА
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ"
_______________________________________________________
(наименование)

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива	ВП	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Отсутствует	
(п. 1 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	
2.	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений	ВП	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	2023	100	100	100	100	100	Возрастающий	Нет	Отсутствует	
(п. 2 введен распоряжением Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	

План достижения показателей ведомственного проекта
в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе	
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию коммунально-бытовых котельных и локальных котельных объектов соцкультбыта, использующих природный газ в качестве основного вида топлива	ВП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1.2.	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений	ВП	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
(п. 1.2 введен распоряжением Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	"Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"	Количество запроектированных котельных	Ед.	1	2023	-	-	-	-	-	Газификация одной котельной мощностью 4,5 МВт	-	-	
		Количество газифицированных котельных	Ед.	-	2023	1	-	-	-	-		строительство	-	
		Мощность газифицированных котельных	МВт	-	2023	4,5	-	-	-	-		-	-	
2.	Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	Количество запроектированных котельных	Ед.	-	2023	1	-	-	-	-	Газификация одной котельной мощностью 0,473 МВт	строительство	-	
		Количество газифицированных котельных	Ед.	-	2023	-	1	-	-	-		строительство	-	
		Мощность газифицированных котельных	МВт	-	2023	-	0,473	-	-	-		-	-	
3.	"Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино"	Финансовое обеспечение выплат	%	100	2023	100	100	100	100	100	Достигнут показатель в текущем году	Иной	Обеспечение достаточности платы концедента для реализации концессионных соглашений	
(п. 3 введен распоряжением Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	

Финансовое обеспечение ведомственного проекта
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)

Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год	
Ведомственный проект "Модернизация (реконструкция, строительство) источников выработки тепловой энергии в газифицированных населенных пунктах Томской области с учетом их перевода на природный газ" (всего), в том числе:		327585,2	104675,0	17341,0	17341,0	17341,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		315982,0	93168,2	6707,5	6707,5	6707,5	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1037,5	941,1	67,8	67,8	67,8	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		10565,7	10565,7	10565,7	10565,7	10565,7	
Мероприятие 1 "Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7" (всего), в том числе:	Департамент архитектуры и строительства Томской области	209022,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		209022,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 2 "Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	Департамент архитектуры и строительства Томской области	4247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		4247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие 3 "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино" (всего), в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	114315,7	104675,0	17341,0	17341,0	17341,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		102712,5	93168,2	6707,5	6707,5	6707,5	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		1037,5	941,1	67,8	67,8	67,8	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		10565,7	10565,7	10565,7	10565,7	10565,7	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.		
1.	Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209022,5	
2.	Мероприятие "Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4247,0	
3.	Мероприятие "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102712,5	
(п. 3 введен распоряжением Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	

План реализации ведомственного проекта

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федерального бюджета				
1.	Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе	
1.1.	Мероприятие 1 "Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом социального обслуживания "Забота" по адресу: Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Набережная, 7"	01.01.2024	28.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	МВт	4,5	209022,5	0,0	Акт ввода в эксплуатацию	Нет	Отсутствует	
1.1К.1	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на строительство объекта"	-	31.05.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Государственный контракт	-	https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html	
1.1К.2	Контрольная точка "Получение разрешения на строительство объекта"	-	01.07.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-		-	Отсутствует	
1.1К.3	Контрольная точка "Выполнение графика работ по строительству объекта"	-	31.11.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Отчет (отчет о выполнении работ)	-	Отсутствует	
1.1К.4	Контрольная точка "Проведение пусконаладочных работ на объекте"	-	28.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Акт признания и подтверждения возникновения права на недвижимое имущество	-	Отсутствует	
1.2	Мероприятие 2 "Строительство газовой котельной для ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Орлиное гнездо"	01.01.2024	28.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	МВт	0,473	4247,0	0,0	Заключение (положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости)	-	Отсутствует	
1.2К.1	Контрольная точка "Подготовка технического задания на проектирование объекта"	-	01.03.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Документ (подготовлено техническое задание)	-	Отсутствует	
1.2К.2	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на выполнение проектно-сметной документации"	-	01.05.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Государственный контракт	-	Отсутствует	
1.2К.3	Контрольная точка "Выполнение графика работ по проектированию"	-	30.07.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Иной документ (информационная справка)	-	Отсутствует	
1.2К.4	Контрольная точка "Выполнение графика работ по проектированию"		30.11.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Иной документ (информационная справка)	-	Отсутствует	
1.2К.5	Контрольная точка "Положительное заключение госэкспертизы на ПСД"	-	25.12.2024	Департамент архитектуры и строительства Томской области	-	-	-	-	Заключение (положительное заключение государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости)	-	Отсутствует	
1.3.	Мероприятие 3 "Проектирование, строительство (реконструкция) газовых котельных города Асино"	01.01.2024	31.12.2026	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	236331,7	0,0	-	да	отсутствует	
(п. 1.3 введен распоряжением Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	
1.3К.1	Выплаты осуществлены		25.12.2024
25.12.2025
25.12.2026	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Платежное поручение (платежный документ)	да	отсутствует	
(п. "1.3К.1" введен распоряжением Администрации Томской области от 29.07.2024
N 546-ра)	

Приложение N 3

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ВДГО)"
_________________________________________________________
(наименование)

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	Общее количество договоров на поставку газа, заключенных с населением	ВП	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	53000	2023	56000	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Отсутствует	
(п. 1 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	

План достижения показателей ведомственного проекта
в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области	
1.1.	Общее количество договоров на поставку газа, заключенных с населением	ВП	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56000	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	"Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных домовладениях на территории Томской области"	Количество договоров поставки газа, заключенных за год	ед.	2000	2023	3000	-	-	-	-	Заключены договоры на поставку газа	Оказание услуг, выполнение работ		

Финансовое обеспечение ведомственного проекта
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)

Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год	
Ведомственный проект "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО)" (всего), в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	390000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		390000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных домовладениях на территории Томской области" (всего), в том числе:		390000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		390000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.		
1.	Мероприятие "Проектирование и монтаж ВДГО в индивидуальных домовладениях на территории Томской области"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

План реализации ведомственного проекта
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федерального бюджета				
1.	Задача. Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области	
1.1.	Мероприятие 1. "Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования"	01.01.2024	28.12.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	390000,0	-	-	Нет	Отсутствует	
1.1К.1	Контрольная точка "Количество договоров, заключенных на поставку газа за 1 кв. 2024 г."	-	30.04.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Заключенные договоры	-	Отсутствует	
1.1К.2	Контрольная точка "Количество договоров, заключенных на поставку газа за 2 кв. 2024 г."	-	31.07.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Заключенные договоры	-	Отсутствует	
1.1К.3	Контрольная точка "Количество договоров, заключенных на поставку газа за 3 кв. 2024 г."	-	31.10.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Заключенные договоры	-	Отсутствует	
1.1К.4	Контрольная точка "Количество договоров, заключенных на поставку газа за 4 кв. 2024 г."	-	31.01.2025	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Заключенные договоры	-	Отсутствует	

Приложение N 4

Утвержден
распоряжением
Администрации Томской области
от 14.03.2024 N 169-ра

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОСТИ ПОСТАВОК СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД"
________________________________________________
(наименование)

		Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)		

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	
(в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"	
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) 2 "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"	

Показатели ведомственного проекта

N п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя (показателя задачи)	Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)	
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период
2027 год	Прогнозный период
2028 год				
1.	Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению	ВП	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	%	100	2023	100	100	100	100	100	-	Нет	Отсутствует	
(п. 1 в ред. распоряжения Администрации Томской области от 29.07.2024 N 546-ра)	

План достижения показателей ведомственного проекта
в 2024 году

N п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам	На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.		
1.	Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению
Томской области для бытовых нужд	
1.1.	Доля газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению	ВП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	

Перечень мероприятий ведомственного проекта

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Планируемое значение показателя мероприятия	Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год				
1.	"Предоставление субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению"	Количество газоснабжающих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению	ед.	1	2023	1	1	1	1	1	Перечисление субсидии газоснабжающим организациям	Оказание услуг, выполнение работ		

Финансовое обеспечение ведомственного проекта
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)

Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год	
Ведомственный проект "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" (всего), в том числе:	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Мероприятие "Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению" (всего), в том числе:		9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет		9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	9340,3	
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации ведомственного проекта в 2024 году

N п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)	Всего на конец 2024 года (тыс. руб.)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.		
1.	Мероприятие "Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению"	0	0	0	0	0	0	0	0	9340,0	0	0	9340,0	

План реализации ведомственного проекта
(в ред. распоряжения Администрации Томской области
от 29.07.2024 N 546-ра)

N п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Мощность объекта	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федерального бюджета				
1.	Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд	
1.1.	Мероприятие 1. "Субсидии газоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа населению"	01.01.2024	28.12.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	ед.	1	9340,3	0,0	Соглашение (соглашение о предоставлении субсидии)	Нет	Отсутствует	
1.1.К.1	Контрольная точка "Размещение объявления о проведении отбора на едином портале и на официальном сайте Администрации Томской области"	-	01.08.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Решение	-	Отсутствует	
1.1К.2	Контрольная точка "Подведение итогов по результатам проведения отбора"	-	01.10.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Решение (решение по рассмотрению заявок)	-	Отсутствует	
1.1К.3	Контрольная точка "Заключение соглашения о предоставлении субсидии"	-	30.11.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Соглашение	-	Отсутствует	
1.1К.4	Контрольная точка "Перечисление субсидии"	-	20.12.2024	Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области	-	-	-	-	Платежный документ	-	Отсутствует